Do wszystkich uczestników postępowania 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Opracowanie projektu budowlanego reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie.”

dotyczy : zapytań z dnia 14.08.2012r. do przetargu na : „Opracowanie projektu budowlanego reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie.”
 
Pytanie nr 1 i nr 4
„W ogłoszeniu podany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.03.2013r. jest niemożliwy do dotrzymania, bo opracowanie i uzgodnienie koncepcji programowej 1,5 miesiąca wykonanie dopiero map do celów projektowych 1,5 miesiąca, wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych 1 miesiąc, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, operatów wodno-prawnych, ZDIUM, ZUDP 3 miesiące, złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę 1,5 miesiąca. 
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania prac projektowych do 30.03.2013 ze złożeniem wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę jest niemożliwy do dotrzymania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W związku wymaganym zakresem przedmiotu zamówienia (m. in. uzyskanie warunków - upracowanie koncepcji, map do celów projektowy, raportu i decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych, ZDIUM, ZUDP itd.) Wnosimy, aby Zamawiający przewidział w umowie możliwość dokonania zmiany terminu wykonania, gdyż w trakcie wykonania prac zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przetargu, w tym przedłużające się terminy wydawania niezbędnych decyzji, uzgodnień itp. Uniemożliwiające już z góry na nie dotrzymanie terminów umownego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Proponujemy termin wykonania dokumentacji ok. 9 miesięcy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania dokumentacji, jednakże wprowadza zapis do umowy w § 7 ust. 10 o brzmieniu: „Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje przedłużających się terminów wydawania niezbędnych decyzji, uzgodnień itp. i co będzie spowodowane wpływającymi odwołaniami, uwagami itp.”

Pytanie nr 2
„Czy na terenach objętym przedmiotem zamówienia jest plan miejscowy”

Odpowiedź:
Tak na terenie objętym przedmiotem zamówienia jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 3
„Czy na terenach objętych przedmiotem zamówienia występuje natura 2000”

Odpowiedź:
Nie na terenie objętym przedmiotem zamówienia nie występuje Natura 2000.